[별지6]

2015년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

풍기지역 도시가스 본관(공급관) 설치지원

담당자

경제활성화실 김창한

(☎639-6133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경제성과 안전성이 우수한 청정연료인 도시가스 공급으로 풍기지역 주민

에게 안전하고 저렴한 연료를 공급하여 에너지소비부담 감소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7 ～2016. 6.30

○ 위 치 : 영주시 풍기읍 일원

○ 규 모 : 총연장 10㎞(정압기 1개소 포함)

○ 사업주체 : 대성청정에너지(주)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,000		2,528	1,472
국 비
시 도 비	410		346	64
시군구비	1,495		918	577
지 방 채
민간자본	2,095		1,264	831
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

❍ 2015. 1월 : 도시가스 5개년계획 수립(풍기지역 포함)

❍ 2015. 7월 : 실시설계 및 공사착공

❍ 2015. 12월 : 공급관 12km 설치완료, 벽산그랜드A외 84가구 공급개시

❍ 2016. 6. 30 : 공사완료(현재 500여가구 도시가스 공급중)

□ 향후계획

○ 연차적으로 공급관 추가 설치로 풍기지역 도시가스 공급 확대 추진

사업명

하이테크 베어링 산업화 기반구축사업

담당자

투자전략실 박상훈

(☎639-6193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업 경쟁력의 핵심인 고기능성 베어링 기술 발전을 위하여 베어링 시험       센터와 클러스터를 조성하고 정부차원 육성

○ 고부가가치 중심의 무역역조 개선을 위해 기술주도형 베어링 산업에 대한       정부 지원과 국제규격 시험평가 기능 중심의 연구기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ～ 2019(5년간)

○ 위 치 : 영주시 장수면 갈산리 1065 번지

○ 규 모 : 부지 9,874.2㎡, 연면적 2,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000  백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	27,000	-	2,900	4,000	20,100
국 비	20,000	-	1,500	3,000	15,500
시 도 비	3,000	-	400	-	2,600
시군구비	4,000	-	1,000	1,000	2,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 2016. 1.  1 : 임시 평가센터 이전(동양대학교 → 장수농공단지)

○ 2016. 1. 14 : 1차 베어링 운영위원회 및 자체장비도입심의위원회

○ 2016. 3. 30 : 시험평가센터 부지매입

○ 2016. 5. 26 : 2차 베어링 운영위원회 및 자체장비도입심의위원회

○ 2016. 6. 20 : 실시설계를 위한 현상공모

□ 향후계획

○ 2016.  8월 : 2차년도 장비구입

○ 2016. 11월 : 시험평가센터 실시설계 완료

○ 2016. 12월 ~ 2017. 12월 : 시험평가센터 건물 착공 및 준공

○ 2016.  7월 ~ 2017.  6월 : 애로기술 지원사업 실시

사업명

장애인 종합복지관 건립

담당자

사회복지과 정근섭

(☎639-6303)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에 대한 각종 정보교환과 여가활동을 할 수 있는 장소 제공

○ 다양한 프로그램 운영으로 장애인의 재활의욕 고취 및 사회참여 기회 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ～ 2016년

○ 위 치 : 영주시 휴천3동 원당로52번길 일원(삼각지마을)

○ 규 모 : 대지 8,651㎡, 건물 2,990㎡(지하1층, 지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000		2,719	4,281
국 비
시 도 비	2,668		2,668
시군구비	4,332		51	4,281
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2012.  3. 27. : 경상북도 투융자심사 승인

○ 2014. 11. 25. : 공사계약 및 착공

○ 2015. 12. 25. : 복지관 및 체육관 기초콘크리트 타설완료

○ 2016.  6. 30. : 방수, 조적, 미장, 철골구조물 공사 완료

□ 향후계획

○ 2016. 10. 31. : 준공 예정

○ 사무실 및 주방용품 추가구입에 따른 예산반영(200백만원)

사업명

노인종합복지관 건립

담당자

주민생활지원과 조태호

(☎639-6353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노령인구 증가로 인한 노인들의 종합적인 복지공간 필요

○ 노인들의 교육, 여가, 건강, 일자리 등 다양한 노인복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 원당로52번길 25

○ 규 모 : 부지 1,981㎡, 연면적 2,335.28㎡(지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,726백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,726	193	1,109	4,424
국 비	1,078		799	279
시 도 비	500	190	310	0
시군구비	4,148	3		4,145
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2015. 06월 : 토지보상 협의 완료

○ 2015. 08월 : 건축협의 완료

○ 2015. 09월 : 건축공사 착공(성일토건)

□ 향후계획

○ 2016. 11월 완공(예정)

□ 사업변경 내역(사업비변경)

○당초 : 5,000백만원(국비1,078, 도비500, 시비 3,422)

○변경 : 5,726백만원(국비1,078, 도비500, 시비 4,148) 증726

(치수공법시공270, 소방관련법령변경186, 음향등 관급자재270)

사업명

가흥1동 주민센터 이전․신축공사

담당자

회계과 이수진

(☎639-6516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가흥 신도시의 급격한 전입인구 증가 등 행정수요가 요구됨에 따라 노후

되고 협소한 주민센터를 이전 ․ 신축하여 섬김행정 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1 ～2017. 4. 20

○ 위    치 : 영주시 가흥동 1622번지

○ 사업내용 : 주민센터 신축 986.27㎡(1동, 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,180		80	1,000	1,100
국 비
시 도 비
시군구비	2,180		80	1,000	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

❍ 2015. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2016. 1 ~ 5월 : 건축허가 등 행정절차 완료

❍ 2016. 6월 : 공사 착공(1차분 공사)

❍ 2016. 12월 : 공사완료 예정

□ 향후계획

○ 2017. 4월 공사 완료

사업명

영주1동 주민센터 등 다기능

복합센터 리모델링 공사

담당자

회계과 이수진

(☎639-6516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구 영주경찰서 건물을 리모델링하여 노후되고 협소한 영주1동 주민센터를

이전하여 주민편익을 제고하고, 교육․문화․복지 등 다기능 복합건물로

활용하여 지역공동체 형성에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1월 ～ 2016. 12. 30

○ 위    치 : 영주시 광복로 47(구. 영주경찰서)

○ 사업내용 : 본관 및 부속건물 리모델링 3,529.69㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,153백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,153		113	3,040
국 비
시 도 비
시군구비	3,153		113	3,040
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

❍ 2015. 7월 : 사업수행능력평가(조달청)

❍ 2015. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2016. 2월 : 공사 착공

❍ 2016. 12월 : 공사완료 예정

사업명

한국문화테마파크 조성사업

담당자

문화예술과 임상호

(☎639-6574)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국문화 전통적 가치를 관광요소로 재구성하여 한국을 대표하고 선도할 수 있는 문화관광단지 조성하여 우리시를 한국 문화 세계화·산업화 거점지역으로 육성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020년

○ 위 치 : 영주시 순흥면 청구리, 단산면 병산리 일원

○ 규 모 : 960,974㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 156,525백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	156,525	43,091	0	10,000	103,434
국 비	77,369	22,688		7,000	47,681
시 도 비	9,947	3,422		900	5,625
시군구비	33,207	10,981		2,100	20,126
지 방 채	6,000	6,000
민간자본	30,002				30,002
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 2014.10.17. : 편입토지 보상 완료(264필지/960,974㎡)

○ 2015.12.31. : 부지정지 및 건축공사 15% 완료

○ 2016.07.20. : 전체공정 22% 진행중

□ 향후계획

○ 2016.12.31. : 부지정지 및 기반시설 설치, 한문화센터등 전체 25%

○ 2017년이후 : 건축, 토목, 조경, 기계설비등 지속추진 및 2020년 준공

사업명

무섬지리문화경관 조성사업

담당자

문화예술과 김성국

(☎639-6576)

□ 사업목적 및 필요성

○ 물동이 형태의 뛰어난 승경자원을 보유하고 있는 무섬마을의 문화경관을       관광자원화하고 복합적 관광기능을 활성화하여 독특한 자연지리 콘텐츠        개발로 지리․생태․수변공간을 활용한 대표적인 관광브랜드로 육성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018년

○ 위 치 : 영주시 문수면 탄산리 일원

○ 규 모 : 77,710㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,703백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	24,703	2,216	1,833	8,040	12,614
국 비	14,517	670	799	5,181	7,867
시 도 비	1,867	59	130	667	1,011
시군구비	7,182	1,487	904	2,192	2,599
지 방 채
민간자본	1,137				1,137
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015.06.30 : 편입토지 77,710㎡ 중 74,418㎡ 보상완료(96%)

○ 2015.07.15 : 부지조성 및 건축공사 중(종합진도 : 10%)

□ 향후계획

○ 2016년 : 토목, 건축, 전기, 통신 시설 공사 추진

○ 2017년 이후 : 토목, 건축, 조경 공사시행 및 준공

사업명

소백산자연명상마을조성사업

담당자

문화예술과 박명신

(☎639-6593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천년고찰 부석사의 전통적 면모를 유지하면서도 현대의 관광수요에 맞는       새로운 관광자원화로 내수 활성화 기여 및 고찰 주변 아름다운 자연경관을       활용한 소백산 자연명상마을 조성 건립으로 불교 문화의 뉴-패러다임으로 부각

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017년

○ 위 치 : 영주시 부석면 북지리 153번지 일원

○ 내 용 : 명상체험센터(2동), 명상공원조성 및 주변정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000	3,300	2,000	1,000	700
국 비	2,500	1,500	1,000
시 도 비	500	300	200
시군구비	4,000	1,500	800	1,000	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015.12.01 : 사업계획변경승인(문체부)

○ 2015.12.15 : 명상체험센터 착공(봉황선원리모델링)

○ 2015.12월 : 명상공원 및 주변정비 공사 착공

○ 2016.05월 : 명상공원 내 가옥 철거완료

○ 2016.08월 : 명상체험센터(화엄강원 및 하선원) 공사

□ 향후계획

○ 2016년 : 명상공원 조성공사 시행

○ 2017년 : 명상체험센터(화엄강원, 하선원)공사 완료, 공원조성 완료

사업명

영주아트센터 조성

담당자

문화예술과 권혁민

(☎639-6575)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반시민,근로자 및 학생들을 위한 문화예술 활동공간이 부족하여 문화와 소통할 수 있는 공간 필요

○ 소공연장 등 다양한 문화예술공간 확보로 시민문화 욕구 충족 및 각종

공연예술을 통한 시민화합의 장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017년

○ 위 치 : 영주시 대학로 77(경북전문대학교 내)

○ 규 모 : 4,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,140	463	66	416	4,195
국 비	2,570	232	33	208	2,097
시 도 비	771	69	10	62	630
시군구비	1,799	162.	23	146	1,468
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2014.09.01 : 공모신청(문화체육관광부)

○ 2015.06.05 : 총괄기획자 위촉

○ 2016.04.21 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2016.06.21 : 공간배치(안) 문화체육관광부 컨설팅 완료

□ 향후계획

○ 2016.09월 : 실시설계 완료

○ 2016.12월 ~ 2017.06월 : 공사시행, 준공, 운영 개시

사업명

창작오페라“선비”제작지원

담당자

문화예술과 권순도

(☎639-6563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 정신의 정수인 선비정신을 예술로 승화시킨 창작 오페라 ‘선비’

제작 공연으로 선비정신의 본향인 우리시를 널리 알리고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 주최/주관 : 창작오페라 ‘선비’제작위원회 / (사)조선오페라단

○ 후    원 : 문화체육관광부, 경상북도, 영주시, 사)대한민국오페라단연합회

※ 조선오페라단 : 우리나라 최초의 민간오페라단(1948 창단)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,950		1,000	550	400
국 비	400		200	200
시 도 비	650		300	150	200
시군구비	650		300	150	200
민간자본	200		200
기 타	50			50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 2014. 1월 ~ 3월 : 오페라 ‘선비’ 제작기획

○ 2014. 6월 ~ 11월 : 대본, 작곡, 오케스트라 편곡

○ 2014. 11월 ~ 2015. 1월 : 연습, 공연홍보, 무대제작

○ 2015. 2월 : 서울공연(국립극장 3회)

○ 2015. 5월 : 영주시 문화예술회관 공연(2회)

○ 2015. 6월 : 경상북도 공연(2회)

□ 향후계획

○ 2016. 9월 25일 : 미국 뉴욕 카네기홀 공연

○ 2016. 10월 13일, 14일 : 영주문화예술회관 공연

사업명

부석사 관광지 조성사업

담당자

관광산업과 박찬민

(☎639-6613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부석사와 연계하여 기 개발지역을 중심으로 합리적인 조성계획을 수립하여 중부내륙권지역의 관광거점지역으로서 역할을 도모

○ 청정고부가 산업인 관광산업의 육성을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1. ∼ 2018. 12.

○ 위    치 : 부석면 북지리 일원

○ 주관단체 : 영주시

○ 사업규모 : 242,280㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,500		1,600	4,000	14,900
국비(기금)	5,500		300	1,000	4,200
시 도 비	1,650		90	300	1,260
시군구비	13,350		1,210	2,700	9,440
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015.  3. : 부석사 관광지 조성사업(1차) 실시설계용역 착수 및 준공

○ 2015.  4. : 부석사 관광지 조성사업(2차) 실시설계용역 착수

○ 2015.  6. : 부석사 관광지 조성사업(1차) 보상 완료 및 공사 착공

○ 2015. 12. : 부석사 관광지 조성사업(1차) 준공

□ 향후계획

○ 계속 추진

사업명

영주풍기인삼축제

담당자

관광산업과 김미선

(☎639-6623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내실있는 축제 추진 추진으로 지역경제 활성화와 풍기인삼의 위상제고 및 산업형 축제로의 정착

○ 다양한 체험행사가 있는 축제 및 문화관광 도시의 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 위    치 : 풍기읍 일원(주행사장 풍기읍 남원천변)

○ 주관단체 : (재)영주풍기인삼축제조직위원회

○ 사업규모 : 영주 풍기인삼축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,794		914	880
국비(기금)	30		30
시 도 비	40		40
시군구비	1,500		700	800
지 방 채
민간자본
기 타	224		144	80

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 11 ∼ 2015. 01 : 기본계획 수립 및 예산편성

○ 2015. 02 ∼ 2015. 09 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외 및 계약

○ 2015. 10. 4 ∼ 2015. 10. 11 : 영주풍기인삼축제 개최

○ 2015. 10. 28 : 평가보고회

○ 2015. 12월말 : 축제 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

사업명

영주선비문화축제

담당자

관광산업과 김미선

(☎639-6623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주 한국선비문화축제를 통하여 선비정신을 현대적 정신문화로 축제화하여 대한민국을 대표하는 한류 정신문화축제로 육성

○ 양대 축제와 더불어 유불문화의 역사 관광자원을 통한 관광객 유치와    농특산물 홍보 및 판매행사를 통한 지역경제활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 위치 : 순흥면 선비촌 일원

○ 주관단체 : 영주시축제추진위원회

○ 사업규모 : 영주 선비문화축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	900		360	540
국 비
시 도 비	40			40
시군구비	860		360	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 10 ∼ 2014. 12 : 기본계획 수립 및 예산수립

○ 2015. 01 ∼ 2015. 05 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외

○ 2015. 5. 20 ∼ 2015. 5. 24 : 영주한국선비문화축제 개최

○ 2015. 6. 5 : 평가보고회

○ 2015. 7월말 : 축제 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

사업명

영주시 시청각 어린이․청소년 도서관 조성

담당자

새마을인재양성과 곽수연

(☎639-7733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 인재양성특구에 걸맞는 시청각 도서관 건립으로 어린이와 청소년이       꿈과 희망을 키울 수 있는 기회 제공

○ 시청각 교육으로 계층별·지역별 교육 불균형 해소 및 사교육비 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015년

○ 위 치 : 경북 영주시 가흥로263 영주시립도서관

○ 규 모 : 1,338㎡(증축 575.06㎡, 리모델링 762.94㎡)/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,010	65	1,945
국 비	989	32	957
시 도 비
시군구비	1,021	33	988
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 3. 28. : 시청각 어린이·청소년도서관 조성사업 선정

○ 2013. 5. 16. : 지방재정 투융자심사(자체)

○ 2013. 6.  5. ~ 2014. 9. 11. : 설계용역

○ 2014.10. 23. : 착공

○ 2015. 7. 17. : 준공

○ 2015. 8. 31. : 개관

사업명

영주 통합도서관 건립

담당자

새마을인재양성과 곽수연

(☎639-7733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낡고 협소한 영주시립도서관과 경상북도립영주공공도서관의 이용객 수용       능력 절대 부족과 정보이용, 자료수집 등 본연의 역할 수행 어려움 해소

○ 소통과 협력을 통해 정부 3.0의 기본가치를 구현하는 시책 사업으로 시·도립도서관을 통합하여 복합 문화시설을 갖춘 도서관을 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~ 2017년

○ 위 치 : 경북 영주시 가흥동 1590-1번지

○ 규 모 : 부지 6,000㎡, 연면적 4,785㎡(지하1, 지상4)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120억원(국비 40, 도비 8, 시비 52, 교육청 20)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,000	5,215	5,000	1,785
국 비	4,000	700	2,000	1,300
시 도 비	800	315	400	85
시군구비	5,200	2,200	2,600	400
지 방 채
민간자본
기 타	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 2013. 7. 29 : 통합(시립+도립)신축 및 운영관리 합의각서 체결

(영주시 ⇔ 경상북도영주교육지원청)

○ 2013.10. 14 : 투융자심사위원회 승인(경상북도)

○ 2014. 8. 22 : 도시계획위원회 승인(경상북도)

○ 2014. 9. 29 : 공유재산관리계획(안) 승인(영주시의회)

○ 2014.12. 17 : 부지매입(경상북도교육청)

○ 2015.12. 31 : 실시설계 완료

○ 2016. 6. 28 : 착공

□ 향후계획

○ 2017. 5월 : 준공(영주교육지원청)

○ 2017. 7월 : 도서관 개관(영주교육지원청)

사업명

스포츠센터 실내수영장 건립

담당자

체육진흥과충영

(☎639-3814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠센터 실내수영장을 통한 체육시설 인프라 확충으로 체육활동

인구 저변 확대와 건강한 사회를 조성하기 위함

□ 사업개요

○ 위    치 : 영주시 가흥동 1972번지 일원(영주시민운동장 내)

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년(5년간)

○ 사업규모 : 건축면적 3,228㎡, 연면적 5,799㎡(지상2층, 지하1층)

○ 사업내용 : 수영장(25m x 8레인), 다목적체육관, 지열에너지 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,000	405	1,645	6,860	6,090
지 방 채	1,500			1,500
국 비	2,720	405	1,288	1,027
시 도 비
시군구비	10,780		357	4,333	6,090
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2014.  5월 : 기획설계용역

○ 2014. 12월 : 부지매입 완료

○ 2015.  6월 : 설계공모관리 용역 완료

○ 2015.  7월 : 실시설계 용역 시행

○ 2015. 12월 : 부지정비공사 완료

○ 2016.  6월 : 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2017. 7월 : 공사사업자 선정

○ 2017. 8월 : 공사 착공

○ 2018. 12월 : 공사 준공

사업명

국토환경 디자인 시범사업

담당자

도시과 한용호(☎639-6683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주시 휴천동 삼각지마을은 중앙선,영동선,북영주선의 철로로 폐쇄되어       있어 기반시설 부족 등으로 공동화가 급속히 진행되고 있어 도심을 재정비       하여 주민생활 및 보건환경 개선 등 안전하고 쾌적한 행복마을을 조성       하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 휴천동 삼각지마을 일원

○ 규 모

• 삼각지 시민공원 및 광장조성 : A= 13,041㎡

• 도로개설 : L=1,479m, B=6.0~9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	14,400	11,400	2,500	500	0
국 비	6,950	6,950
시 도 비	700	200		500
시군구비	4,250	4,250
지 방 채	2,500		2,500
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2010. 04. 15 : MOU체결 (국토교통부장관 ↔ 영주시장)

○ 2012. 09. 14 : 국토환경디자인 시범사업 주민설명회 개최

○ 2013. 03. 15 : 영동선 영주~문단간 지하차도 설치 협약(한국철도공사 경북본부)

○ 2013. 09. 24 : 편입토지 등 보상계획 공고 (영주시 공고 2013-704호)

○ 2014. 05. 26 : 영주시설계자문위원회 개최 및 설계심의 완료

○ 2014. 11. 10 : 국토환경디자인 시범사업 토목,조경 공사 계약 및 착공

○ 2015. 01. 27 : 토지수용 재결신청 (경상북도지방토지수용위원회)

○ 2015. 12. 30 : 국토환경디자인시범사업 토목·조경공사 1차분 준공

○ 2016. 05. 10 : 국토환경디자인시범사업 전기공사 시행

□ 향후계획

○ 2016. 12. 30 : 사업 완료

사업명

도시재생(선도)사업

담당자

도시과 이홍승(☎639-6693)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주역, 영주시청 이전으로 경제적·물리적 쇠퇴로 장소성을 상실하여

舊영주역사를 중심으로 한 사업지 와 배후 주거지의 도시재생이 시급함.

○ 주거지와 상권이 혼재해 있는 구도심 근린상권 중심의 도시재생사업을

통해 소상인 경쟁력을 강화하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 영주시 영주1동, 영주2동 일원

○ 규 모 : 근대경관 조성,들꽃방송,게스트하우스,청년창업지원센터,지하 주차장

확장 및 환경개선사업,할머니묵공장운영,영주옛길 탐방로 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,180		8,250	5,600	6,330
국 비	10,090		5,090	3,000	2,000
시 도 비	1,527		1,527	0
시군구비	8,563		1,633	2,600	4,330
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2014.  5.  7 : 도시재생 선도지역 지정고시

○ 2014.  9. 25 : 도시재생 활성화계획 용역 착수

○ 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획 승인

○ 2015.  4. 21 : 영주시 도시재생지원센터 개소식

□ 향후계획

○ 2017.  12. : 공사준공 및 시설물 유지관리

사업명

하망지구 보행환경개선사업

담당자

도시과 권기혁(☎639-6695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통행빈도가 높은 하망동 일대를 보행환경개선사업 추진으로 안전하고

편리한 보행환경 구축하여 시민의 삶의 질 향상에 기여하고 함.

○ 지중화사업 연계추진으로 깨끗한 거리 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 하망동 일원

○ 규 모 : 보행환경개선 L=1.2km

○ 도입시설 : 자전거관련시설, 주차장, 정비소, 대여소, 조경 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,900		2,300	1,200	400
국 비	1,000		1,000
시 도 비
시군구비	2,900		1,300	1,200	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014.  7. 28 : 실시설계용역 완료

○ 2014.  9.  1 : 시설공사 착공

○ 2014.  12.30 : 지중화사업 이행협약체결

○ 2015.  4.  1 : 지중화사업 및 도시가스 설치공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. 30 : 시설공사 및 지중화사업 준공예정

사업명

장수~성곡도로 확포장공사

담당자

건설과 강신혁(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과

원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여

○ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2020(9년간)

○ 위 치 : 영주시 장수면 갈산리 일원

○ 규 모 : 도로확·포장 L=3,500m B=10.0m(8.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,900	1,260	180		3,460
국 비
시 도 비	280	280
시군구비	4,620	980	180		3,460
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28.6%)

○ 갈산도로 확포장 완료 L=1.0km

□ 향후계획

○ 2017년 : 잔여구간 예산 확보 및 공사 착공

○ 총 잔여공사 L=2.5km 연차 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2012 ~ 2016(5년간), 변 경 : 2012 ~ 2020(9년간)

사업명

성곡~안정도로 확포장 공사

담당자

건설과 강신혁(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과

원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여

○ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018(7년간)

○ 위 치 : 영주시 장수면 성곡리 ~ 안정면 용산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=5.2km, B=10.0(8.0)m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,800	1,300	400	240	2,860
국 비
시 도 비	285	285
시군구비	4,515	1,015	400	240	2,860
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 남녁도로 확포장 공사 완료 : L=0.8km

□ 향후계획

○ 2016.7.15 : 공사 착공

○ 잔여구간 4.4km 연차 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2012 ~ 2016(5년간), 변 경 : 2012 ~ 2018(7년간)

사업명

석포리~지동리간도로

(시도10호선) 확포장

담당자

건설과 김대동(☎639-6715)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과 원활한

농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2020(7년간)

○ 위 치 : 영주시 이산면 석포1리 ~ 지동2리

○ 규 모 : 도로확·포장 L=6.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,000	800	300	200	10,700
국 비
시 도 비
시군구비	12,000	800	300	200	10,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 2015.6.23 : 공사 착공

○ 2016.6.30 : 보상금 지급(11건 금231백만원)

□ 향후계획

○ 2018년 1차공사 완료

○ 향후 예산 확보하여 L=3.9km에 대하여 연차적으로 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2014 ~ 2017(4년간), 변 경 : 2014 ~ 2020(7년간)

사업명

승평교 개체공사

담당자

건설과 강한원(☎639-6712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문수면 월호리 ~ 승문리를 연결하는 기존교량이 노후 및 차폭 협소로

차량교행이 불가하여 교통사고 위험 상존

○ 교량 하부구조 세굴 및 내하력 부족한 재난위험시설(D등급) 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017(4년간)

○ 위 치 : 영주시 문수면 월호리

○ 규 모 : 교량개체 L=169m, 접속도로 L=400m, B=8.0(6.0)m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	2,790	250	1,700	260
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	2,790	250	1,700	260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2014.12.2 : 공사 착공

○ 2016.12. : 거더 조달 계약 및 거치

○ 2017.12. : 교면포장 및 준공

□ 향후계획

○ 2017년 : 토공 및 구조물공 시행

○ 2018년 : 도로 포장 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙당 초 : 2014 ~ 2015(2년간), 변 경 : 2014 ~ 2017(4년간)

사업명

진우교(지방도935호선) 개체공사

담당자

건설과 김대동(☎639-6715)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소하고 위험한 도로의 노후 교량개체로 교통여건 개선과 안전사고 예방

○ 도로 선형개량으로 지역균형개발과 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018(4년간)

○ 위 치 : 영주시 상망동(조와동)

○ 규 모 : 교량개체 L=20m, 도로확포장 L=920m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,600		1,010	300	2,290
국 비
시 도 비	1,800		155		1,645
시군구비	1,800		855	300	645
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2016.5.04 : 공사 착공

○ 2016.6.30 : 보상금 지급(33건 금757백만원)

- 잔여필지 9건(2017년 예산으로 지급)

□ 향후계획

○ 2017년 : 토공 및 구조물공 시행

○ 2018년 : 도로 포장 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2015 ~ 2017(3년간), 변 경 : 2015 ~ 2018(4년간)

사업명

상석교 개체공사

담당자

건설과 강신혁(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교량 하부구조 세굴 및 내하력 부족으로 재해위험 우려

○ 부석면 상석리 마을 연결 교량으로 노후 및 폭이 협소하여 대형 재해위험

사고 발생 우려 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017(5년간)

○ 위 치 : 영주시 부석면 상석리

○ 규 모 : 교량개체 L=47m, 도로확포장 L=250m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,200	200	0	1,100	900
국 비
시 도 비	0
시군구비	2,200	200		1,100	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013 : 실시설계 용역 및 주민설명회 완료

○ 2014 ~ 2015 : 보상금 지급

□ 향후계획

○ 2016. 07 : 공사 발주 및 착공

○ 2018. 12 : 공사 완료 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2013 ~ 2017(5년간), 변 경 : 2013 ~ 2018(6년간)

사업명

여륵~파지도로 확포장공사

담당자

건설과 강한원(☎639-6712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미 개설된 시도16호선을 개설하여 시도3호선과 연결로 도로기반시설

확충 및 주요 연결 지점감 도달시간 단축

○ 낙후지역 균형개발 촉진과 쾌적한 교통환경 조성 및 물류비 절감으로

주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018(5년간)

○ 위 치 : 영주시 장수면 파지리~안정면 여륵리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,300	400	0	100	1,800
국 비
시 도 비	1,100	200			900
시군구비	1,200	200		100	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014 : 실시설계 및 주민 설명회 완료

○ 2014 ~ 2015 : 보상금 지급

□ 향후계획

○ 2016. 10 : 공사 발주 및 착공

○ 2018. 12 : 공사 완료 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

∙당 초 : 2014 ~ 2017(4년간), 변 경 : 2014 ~ 2018(5년간)

사업명

초암사 진입도로 확포장공사

담당자

건설과 강신혁(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소백산 국립공원내 초암사를 연결하는 협소한 도로를 확포장하여 관광객

및 지역 주민들에게 교통 편익 제공

○ 낙후지역 균형개발 촉진과 교통소통 및 농산물 수송원활로 주민소득

증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017(6년간)

○ 위 치 : 영주시 순흥면 배점리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.61km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,300	700	400	210	990
국 비
시 도 비	105			105
시군구비	2,195	700	400	105	990
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012 : 실시설계 및 주민 설명회 완료

○ 2013 ~ 2015 : 보상금 지급

○ 2015. 9 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 공사 완료 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

∙ 당 초 : 2012 ~ 2017(6년간), 변 경 : 2012 ~ 2018(7년간)

사업명

장수덕암~한정교간도로개설공사

담당자

건설과 민규택(☎639-6723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장수면 반구리에서 문정동을 연결하는 마을간 연결도로를 개설하여

지역주민의 교통편익과 지역균형 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 영주시 장수면 반구리 덕암~한정교 일원

○ 규 모 : 도로확포장  L=1.80km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,700	1,200	200	250	2,050
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	1,200	200	250	2,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28 %)

○ 토공 및 구조물 작업 완료 L=700m

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=1.1㎞)에 대하여 예산 확보하여 연차적으로 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

생태관찰원 건립

담당자

녹색환경과

우윤하(☎639-6753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백두대간의 중심지인 소백산의 생태축 복원으로 생물자원의 중요성 제고와       야생생물(멸종위기종)을 특화한 생태체험장 등을 조성하여 자연환경 교육       및 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012 ∼ 2015년

○ 위 치 : 순흥면 태장리 174-1번지 일원

○ 규 모 : 관리동(962㎡/3층), 홍보동(299㎡/2층), 작업로 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,817백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,817	3,615	202	-	-
국 비	1,997	1,847	150	-	-
시 도 비	770	718	52	-	-
시군구비	1,050	1,050	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 : 2012. 10월

○ 공사착공 : 2013. 5. 27

○ 공사준공 : 2015. 1. 26

○ 생태관찰원 사용허가(국립공원관리공단 종복원기술원 : 2015. 3월)

※생물자원보전시설 등록(환경부) : 2015. 10월

□ 향후계획

○ 관람객 편의시설 제공 및  교육프로그램 개발

사업명

죽계천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과 이선아

(☎639-6803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 오염원이 위치한 죽계천을 대상으로 수생태 및 생물서식처를 조성       하여, 안전한 상수원수 확보 및 시민 편익시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 03월 ∼ 2017. 12월

○ 위 치 : 죽계천(순흥면 ∼ 안정면)

○ 규 모 : 3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000	1,930	456	410	4,204
국 비	4,200	1,160	274	246	2,520
시 도 비	1,050	289	68	61	632
시군구비	1,750	481	114	103	1,052
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 보상계획 및 열람공고 게시 : 2015.01.09

○ 편입토지 보상 : 2016.01

○ 2차분 착공 : 2016.01.05

○ 1차분 공사 준공(계약) : 2016.05.14

□ 향후계획

○ 토지보상 지급 및 공사 추진 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시) : 해당없음.

사업명

영주 광역친환경농업단지조성

담당자

농정과수과 김영동

(☎639-7311)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주댐 건설에 따른 수변지역 농업환경개선을 통한 농업인 불안감해소

○ 자원순환형 친환경농업단지 조성 및 수질보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2016

○ 위 치 : 영주시 이산면 석포리 585 일원

○ 규 모 : 부지면적 70,326㎡, 건축면적 37,654㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000	1,000	3,599.1	2,400.9	0
국 비	2,100	300	1,079.7	720.3	0
시 도 비	1,050	150	539.9	360.1	0
시군구비	2,450	350	1,259.7	840.3	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	1,400	200	719.8	480.2	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 콩유통시설 8월중 완공계획

○ 기타 시설은 완공

□ 향후계획

○ 8월 완공 후 정산 계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 당초 2012~2014(3년간) 사업이었으나 조건부 승인에 따라 조건 해소가 되지 않아 사업지연 2014년 3월 조건해제 후 사업시행에 따라 사업 지연

사업명

체류형 농업창업지원센터 건립

담당자

농정과수과 손희관

(☎639-7322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예비 귀농인을 대상으로 일정기간 가족과 함께 체류하면서 농촌이해, 농촌적응,

농업 창업과정 실습 및 교육을 체험할 수 있는 One-Stop지원센터를

건립․운영하여 귀농인의 안정적인 정착 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 - 2016년(공사기간 : 2015. 1. 5 - 2016. 4. 30)

○ 위 치 : 영주시 아지동 230-3번지 일원

○ 규 모 : 단지조성 29,900㎡(교육관, 체류형 주택 30세대, 세대별 텃밭 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,000	2,241	2,789	2,970
국 비	4,000	174	1,853	1,973
시 도 비	1,200	52	556	592
시군구비	2,800	2,015	380	405
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 12. 30 : 공사 계약(건축, 정보통신, 전기, 소방, 감리)

○ 2016. 04. 30 : 공사 준공

○ 2016. 06. 13 : 시설운영

□ 사업변경 내역

○ 사업기간  당초 : 2013~2014, 현재 : 2013~2016

사업명

농식품가공산업 육가공공장 지원사업

담당자

유통지원과 문인록

(☎639-7327)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 축산물의 소비촉진과 일자리 창출을 통한 농가소득증대로

지역경제활성화를 도모하기 위해 가공시설 기자재 등 생산 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016. 12. 30.

○ 위 치 : 영주시 안정면 내줄리 산1번지 일원

○ 규 모 : 부지 11,516㎡/가공시설 2,810.2㎡/기계장비 9종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000			2,000
국 비
시 도 비	180			180
시군구비	420			420
지 방 채
민간자본	1,400			1,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 11월 : 사업시설부지 내 토공작업이 완료됨

○ 2015. 12월 : 진입로 확보(진입로 농지 매입)

○ 2016. 6월 : 실시설계 및 기술심의 완료

□ 향후계획

○ 2016. 7월 : 공사계약 및 입찰

○ 2016. 7월 : 공사착공

○ 2016. 11. 30. : 준공

○ 2016. 12월 : 사업완료 및 사업비 정산

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

영주약용작물 산지유통센터 건립

담당자

유통지원과 곽형렬

(☎639-7326)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경북북부권역의 약용작물 산업발전을 선도하는 광역통합 APC 육성

신성장 동력 확보를 통한 약용작물 재배농가의 농가소득 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 영주시 평은면 평은리 826번지 일원

○ 규 모 : 부지 10,621㎡/연면적3,636㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,500			4,500
국 비	1,350			1,350
시 도 비	405			405
시군구비	945			945
지 방 채
민간자본	1,800			1,800
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

❍ 2014. 2월 : 예비신청(농림축산식품부, aT) 및 선정

❍ 2015. 11월 : 실시설계 완료

❍ 2016. 7월 : 건물공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

농식품가공산업 육가공공장 지원사업

담당자

유통지원과 문인록

(☎639-7327)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 축산물의 소비촉진과 일자리 창출을 통한 농가소득증대로

지역경제활성화를 도모하기 위해 가공시설 기자재 등 생산 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016. 12. 30.

○ 위 치 : 영주시 안정면 내줄리 산1번지 일원

○ 규 모 : 부지 11,516㎡/가공시설 2,810.2㎡/기계장비 9종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000			2,000
국 비
시 도 비	180			180
시군구비	420			420
지 방 채
민간자본	1,400			1,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 11월 : 사업시설부지 내 토공작업이 완료됨

○ 2015. 12월 : 진입로 확보(진입로 농지 매입)

○ 2016. 6월 : 실시설계 및 기술심의 완료

□ 향후계획

○ 2016. 7월 : 공사계약 및 입찰

○ 2016. 7월 : 공사착공

○ 2016. 11. 30. : 준공

○ 2016. 12월 : 사업완료 및 사업비 정산

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

우량송아지 생산 및 비육시설사업

담당자

축산특작과

김근영(☎639-7347)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송아지 생산단지 및 사육시설 지원을 통해 우수 형질의 송아지를 생산 공급

○ 수정란 이식을 통한 우량송아지 대량생산기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2017. 6월

○ 위 치 : 영주시 부석면 감곡리 721-1

○ 규 모 : 5동 6,900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000			2,000
국 비	400			400
시 도 비	120			120
시군구비	280			280
지 방 채	0			0
민간자본	1,200			1,200
기 타	0			0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 건축인허가 완료 : 2015. 4.  3.

○ 농림축산식품부 사업대상자 선정 : 2015. 5. 14.

○ 토목공사 착공 : 2016. 7. 11.

□ 향후계획

○ 토목공사 완료 : 2016. 11월말

○ 건축공사 완료(사업완료) : 2017. 6월말

○ 가축입식 : 2017. 9월

사업명

인삼 생산유통시설 현대화사업

담당자

축산특작과 우병준

(☎639-7356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리지역 특화 작물인 인삼을 이용한 명품 특산품으로 육성

○ 소비자의 다양한 수요에 대응하고, 차별화된 건강기능성 신제품 제조 기술개발을 통한 국내 및 해외시장 개척으로 농가소득 증대에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 봉현면 대촌리 410-3번지

○ 규 모 : 건축 연면적 1,685.29㎡ / 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,100		1,050	1,050
국 비	630		315	315
시 도 비	258		129	129
시군구비	602		301	301
지 방 채
민간자본	610		305	305
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업장 부지 위치 (변경)승인

○ 건축물 설계 중

□ 향후계획

○ 새로운 부지에 현대식 시설을 갖춘 가공공장 신축

○ 공장내부 GMP시설 및 신재품 개발 등.

사업명

다목적 농업인 교육관 신축공사

담당자

농촌지도과 김병각

(☎639-7362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인의 다양한 교육수요를 충족시킬 수 있는 다목적 농업인 교육 시설 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 5월 ~ 2016년 11월

○ 위 치 : 영주시 안정면 안정로 30(농업기술센터 부지 내)

○ 규 모 : 농업인 교육관 1.142㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		102	2,898
국 비	1,500		51	1,449
시 도 비
시군구비	1,500		51	1,449
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 구조물완공, 70%)

○ 2015.  5월 : 자료수집 및 기본설계

○ 2015. 12월 : 2016년 지특예산확보(24억원)

○ 2016.  1월 : 원가심사, 일상감사, 건축협의 등

○ 2016.  3월 : 공사계약 및 발주

□ 향후계획

○ 2016. 10월 : 건축공사 준공 및 전상장비 설치

○ 2016. 11월 : 교육관 개관

사업명

영주시 북부권역통합상수도

설치 사업

담당자

수도사업소 이  호

(☎639-7270)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부권역을 통합하고 수원이 풍부한 부석저수지를 수원으로 하는 통합상수도 시설을 설치하여 물 수요량 증가에 능동적 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011~2018

○ 위 치 : 영주시 순흥, 단산, 부석면 일원

○ 규 모 : 송․배수관로 매설 L=65.6km, 배수지 2지, 정수시설 Q=2,100㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년도 이후
계	22,030	8,702	3,715	2,500	7,113
국 비	15,421	5,517	2,600	1,750	5,554
시 도 비	1,983	673	335	224	751
시군구비	4,626	2,512	780	526	808
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2013. 04 : 공사 및 감리용역 착수

○ 2015. 06 : 공사(2차분) 준공

□ 향후계획

○ 2016. 06 : 3차분 준공(막여과동, 착수정 등) 준공

○ 2017. 01 : 통합정수장 시운전

사업명

이산면 농어촌생활용수개발사업

담당자

수도사업소 이  호

(☎639-7270)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방상수도가 미보급된 농어촌 면단위 지역에 상수도 시설 확충으로 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급함으로써 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2019

○ 위 치 : 영주시 상망동, 이산면 일원

○ 규 모 : 송․배수관로 L=23km, 배수지 V=2,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

계	집행액	향후 소요액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년도 이후
계	13,980	1,975	1,428	714	9,863
국 비	9,785	1,382	1,000	500	6,903
시 도 비	1,258	178	128	64	888
시군구비	2,937	415	300	150	2,072
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015. 12 : 이산면 지동리, 석포리, 원리 급수구역 일부준공L=6.5km

□ 향후계획

○ 2016. 01 : 이산면 상망/신암지구 급수구역 확장공사 착공

○ 2016. 09 : 이산면 원리~석포리, 번개들 지구 급수구역 확장공사 착공

○ 2018. 06 : 이산면 상망/신암지구 급수구역 확장공사 준공 L=9.8km

사업명

부석정수장 고도정수처리시설

설치 사업

담당자

수도사업소 이  호

(☎639-7270)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 임곡천에서 부석저수지로 취수원 이전 및 통합정수시설

(Q=2,100㎥/일)을 설치하여 순흥,단산,부석면에 맑고 깨끗한 수돗물

안정적으로 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 영주시 부석면 일원

○ 규 모 : 고도정수처리시설설치 1식(Q=2,100㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

계	집행액	향후 소요액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년도 이후
계	6,100		286	2,143	3,671
국 비	4,270		200	1,500	2,570
시 도 비	549		26	193	330
시군구비	1,281		60	450	771
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  8%)

○ 2011. 12 : 기본 및 실시설계용역 완료(북부권통합상수도사업 병행실시)

○ 2015. 03 : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 고도정수처리시설 설치 준공

사업명

영주시 하수처리장 증설

담당자

환경사업소 하수도팀

이동희(☎639-7276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장의 용량부족을 해소 및 공공수역의 수질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2015

○ 위 치 : 적서동(환경사업소내) 일원

○ 규 모 : 처리장 증설 5천톤/일(40천톤/일→45천톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30,333	28,333	2,000
국 비	15,167	15,167
시 도 비	3,183	3183
시군구비	11,983	9,983	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 시운전 및 홍보관 리모델링 공사

○ 총괄준공(2015. 12.)

□ 향후계획

○ 하수처리장 증설

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상망지구 하수관거정비

담당자

환경사업소 하수도팀

김명준(☎639-7277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장의 저농도·용량초과의 문제점 해결 및 방류하천의 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 상망동일원

○ 규 모 : 오수관로 L=7.2km, 배수설비 338개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,513	133	3,119	3,261
국 비	4,559	93	2,691	1,775
시 도 비
시군구비	1,954	40	428	1,486
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2차분 착공(2015. 7.), 3차분 착공(2015. 12.)

○ 1차분 준공(2015. 7.)

□ 향후계획

○ 차수분 준공 및 총괄준공(2016. 12.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 오수관로 L=7.244km

○ 변경 : 오수관로 L=7.358km

사업명

적동농어촌마을 하수도설치

담당자

환경사업소 하수도팀

김명준(☎639-7277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거환경개선 및 방류수역의 수질오염 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 문수면 적동리 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=2.3km, 하수처리장 50㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,307백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,307	350	780	1,800	377
국 비	2,315	245	570	1,260	240
시 도 비	208	22	99	63	24
시군구비	784	83	111	477	113
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 1차분 착공(2015. 6.), 2차분 착공(2015. 12.)

□ 향후계획

○ 3차분 착공(2016. 3.)

○ 1차분 준공(2016. 6.)

사업명

영주시주변 하수관거 정비

담당자

환경사업소 하수도팀

임상윤(☎639-7278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 1,2단계 BTL사업에서 제외된 영주시 주변의 하수관로를 정비하여       저농도·용량초과 문제점 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 영주동, 가흥동, 창진동 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=9.0km, 배수설비 270개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,439백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,439		225	3,010	1,204
국 비	3,107		158	2,106	843
시 도 비
시군구비	1,332		67	904	361
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 용역 착수(2015. 5.)

○ 서늘기, 필두지구 착공(2015. 12.)

□ 향후계획

○ 관사골, 한절마지구 착공(2016. 6.)