[별지6]

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

베어링산업 기술개발 및 연구기반구축

담당자

투자전략실               조낭(☎639-6192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제규격의 베어링 시험・평가・인증체계 및 장비 구축을 통하여 고부가가치       베어링 산업 경쟁력을 확보하고 하이테크 베어링 산업 관련 기술지원과 기업 유치

□ 사업개요

○ 위    치 : 경북 영주시 장수면 갈산리 1065번지

○ 사업기간 : 2015 ~ 2019년(5년간)

○ 사 업 량 : 부지 9,804.2㎡(건축 연면적 2,774.25㎡)

○ 사업내용 : 베어링시험평가센터 구축(센터건립, 장비구축, 체계정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	27,000	1,900	5,000	9,600	10,500
국 비	20,000	1,500	3,000	5,000	10,500
도 비	3,000	400	0	2,600	0
시 비	4,000	0	2,000	2,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016.  1.  1 : 하이테크베어링시험평가센터 이전(장수농공단지 내)

○ 2016.  5월 ~ 2016. 12월 : 설계용역 공모 및 설계용역

○ 2016  8. 22 ~ 2017. 6. 15 : 시험평가센터 설계 완료

○ 2016.  8. 23 : 건축현상공모 설명회 개최

○ 2017.  5. 18 : 영주시기술자문위원회 심의결과 통보

○ 2017.  7. 14 ~7. 20 : 시험평가센터 건축공사 입찰공고(조달청)

□ 향후계획

○ 2017.  7월 ~ 2019. 12월 : 시험평가센터 장비구축 및 기업지원

○ 2017.  8월 ~ 2018.  6월 : 시험평가센터 건축공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

경량AI소재기반 융복합부품

시생산기반구축

담당자

투자전략실 조낭(☎639-6192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차 연비 규제와 친환경 산업정책으로 인해 에너지 절약형 경량

소재의 중요성이 부각되고 고강도 합금소재 수요의 증가 추세8,700에 맞춰

융복합 상용화 기술개발 및 산업화 기반구축이 절실함

□ 사업개요

○ 위    치 : 경북 영주시 풍기읍 교촌리 1(동양대학교 장인관)

○ 사업기간 : 2016~2020년(5년간)

○ 사 업 량 : 부지 10,000㎡(건축 연면적 6,540㎡)

○ 사업내용 : 합금소재분석 및 경량합금기술센터 건립, 장비도입, 융복합

기술상용화 기술 개발, 전후방 산업 육성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2017년 이후
계	20,700	0	2,000	8,640	10,060
국 비	10,000	0	1,000	1,500	7,500
도 비	4,280	0	400	2,856	1,024
시 비	6,420	0	600	4,284	1,536
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2015. 1 ~ 3월 : 기본계획 연구용역 완료(영주시)

○ 2015. 12. 21 ~ 2016. 4. 18 : One-Point 용역 발주(경상북도)

○ 2017.  1. 20 : 경량합금 기술센터 건물 매입(동양대학교 장인관)

○ 2017.  2. 28. 3. 30 : 기술센터 진입로 사유지 기술센터 토지 매입

○ 2017.  3. 20 ~7. 17 : 기술센터(장인관) 리모델링 및 시생산동 증축 설계 완료

□ 향후계획

○ 2017.  8. 15 : 기술센터 진입로 확포장 준공(동양대)

○ 2017.  8월~  2018.  2월 : 기술센터(장인관) 리모델링 및 시생산동 증축 착공 및 준공

○ 2017.  8월 ~ 2020. 12월 : 장비도입 및 기업지원 등

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

노인복지관 건립

담당자

주민생활지원과        조태호(☎639-6354)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노령인구 증가로 인한 노인들의 종합적인 복지공간 필요

○ 노인들의 교육, 여가, 건강, 일자리 등 다양한 노인복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 원당로52번길 25

○ 규 모 : 부지 1,981㎡, 연면적 2,335.28㎡(지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,726백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,726	1,302	4,424
국 비	1,078	799	279
시 도 비	500	500
시군구비	4,148	3	4,145
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 06월 : 토지보상 협의 완료

○ 2015. 09월 : 건축협의 착공(성일토건)

○ 2016. 12월 : 준공

□ 향후계획

○ 2017. 3월민간위탁자 선정

○ 2017. 5월 노인복지관 운영

□ 사업변경 내역(사업비변경)

○당초 : 5,000백만원(국비1,078, 도비500, 시비 3,422)

○변경 : 5,726백만원(국비1,078, 도비500, 시비 4,148) 증726

(치수공법시공270, 소방관련법령변경186, 음향등 관급자재270)

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

한국문화테마파크 조성사업

담당자

문화예술과         임상호(☎639-6574)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국문화 전통적 가치를 관광요소로 재구성하여 한국을 대표하고 선도할

수 있는 문화관광단지 조성하여 우리시를 한국 문화 세계화·산업화 거점

지역으로 육성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020년

○ 위 치 : 영주시 순흥면 청구리, 단산면 병산리 일원

○ 규 모 : 960,974㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  156,525백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	156,525	52,954	10,000	10,000	83,571
국 비	77,369	22,688	7,000	7,000	40,681
시 도 비	9,947	3,421	900	900	4,726
시군구비	33,207	20,845	2,100	2,100	8,162
지 방 채	6,000	6,000
민간자본	30,002				30,002
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 2014.10.17. : 편입토지 보상 완료(264필지/960,974㎡)

○ 2016.12.31. : 건축지하동 골조완료 및 전통건축 공사중(공정율 30%)

○ 2017.07.18. : 전체공정 36% 진행중

□ 향후계획

○ 2017.12.31. : 전통건축 18개동 완료 및 부지조성 공사추진 등 전체43%

○ 2018년이후 : 건축, 토목, 조경, 기계설비등 지속추진 및 2020년 준공

사업명

무섬지리문화경관 조성사업

담당자

문화예술과            김성국(☎639-6576)

□ 사업목적 및 필요성

○ 물동이 형태의 뛰어난 승경자원을 보유하고 있는 무섬마을의 문화경관을       관광자원화하고 복합적 관광기능을 활성화하여 독특한 자연지리 콘텐츠        개발로 지리․생태․수변공간을 활용한 대표적인 관광브랜드로 육성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018년

○ 위 치 : 영주시 문수면 탄산리 일원

○ 규 모 : 77,710㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  24,703백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	24,703	12,053	4,286	1,429	6,935
국 비	14,517	6,650	3000	1000	3867
시 도 비	1,867	855	386	129	496
시군구비	7,182	4,548	900	300	1,435
지 방 채
민간자본	1,137				1,137
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ 2015.06.30 : 편입토지 77,710㎡ 중 74,418㎡ 보상완료(96%)

○ 2016.12.31 : 건축·전기·통신·소방 공사중

□ 향후계획

○ 2017.12.31. : 건축·토목·전기·통신·소방공사 추진 등 전체75%

○ 2018년이후 : 조경공사 및 전시공사 완료, 2018년 준공

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

창작오페라 “선비” 제작지원

담당자

문화예술과 권순도(☎639-6563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 정신의 정수인 선비정신을 예술로 승화시킨 창작 오페라 ‘선비’

제작 공연으로 선비정신의 본향인 우리시를 널리 알리고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

○ 주최/주관 : 창작오페라 ‘선비’제작위원회 / (사)조선오페라단

○ 후    원 : 문화체육관광부, 경상북도, 영주시, (사)대한민국오페라단연합회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,740	1,000	500	240
국 비	400	200	200
시 도 비	540	300	150	90
시군구비	600	300	150	150
민간자본	200	200
기 타

□ 추진상황

○ 2014. 1월 ~ 3월 : 오페라 ‘선비’ 제작기획

○ 2015. 2월 : 서울공연(국립극장 3회)

※ 제1회 대한민국창작오페라페스티벌 최우수작품 선정

※ 2015.03월 : 말레이시아 정부 초청 우정의 오페라 갈라 콘서트 열창

○ 2015. 5월 : 영주시 문화예술회관 공연(2회)

○ 2015. 6월 : 경상북도 공연(2회)

○ 2016. 9월 25일 : 미국 뉴욕 카네기홀 공연

○ 2016. 10월 13, 14일 : 영주문화예술회관 공연

□ 향후계획

○ 2017.11.11. : 베트남공연(호찌민-경주 세계문화엑스포2017)

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

소백산 자연명상마을 조성사업

담당자

문화예술과 박명신(☎639-6593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천년고찰 부석사의 전통적 면모를 유지하면서도 현대의 관광수요에 맞는       새로운 관광자원화로 내수 활성화 기여 및 고찰 주변 아름다운 자연경관을       활용한 소백산 자연명상마을 조성 건립으로 불교 문화의 뉴-패러다임으로 부각

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018년

○ 위 치 : 영주시 부석면 북지리 153번지 일원

○ 내 용 : 명상체험센터(2동), 명상공원조성 및 주변정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000	5,500	1,000		500
국 비	2,500	2,500
시 도 비	500	500
시군구비	4,000	2,500	1,000		500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2015.12.01 : 사업계획변경승인(문체부)

○ 2015.12.15 : 명상체험센터 착공(봉황선원리모델링, 하선원 개축)

○ 2016.12.31 : 명상공원 공사 착수 및 인법당 신축공사 착수

○ 2017.07.31 : 명상공원 및 명상센터 공사 중

□ 향후계획

○ 2017.12.31. : 소백산 자연명상센터 및 공원 조성 완료

○ 2018년 이후 : 명상공원 주변 토지보상 및 주변정비

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주풍기인삼축제

담당자

새마을관광과          전한구(☎639-6603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내실있는 축제 추진으로 지역경제 활성화와 풍기인삼의 위상제고 및

산업형 축제로의 정착

○ 다양한 체험행사가 있는 축제 및 문화관광 도시의 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1 ∼ 12. 31

○ 위 치 : 풍기읍 일원(주행사장 풍기읍 남원천변)

○ 규 모 : 영주 풍기인삼축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,320		880	720	720
국 비
시 도 비	30		30
시군구비	2,190		750	720	720
지 방 채
민간자본
기 타	100		100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 11 ∼ 2016. 01 : 기본계획 수립 및 예산편성

○ 2016. 02 ∼ 2016. 09 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외 등

○ 2016. 10. 15 ∼ 2016. 10. 23 : 경북영주풍기인삼축제 개최

○ 2016. 11. 16 : 평가보고회

○ 2016. 12월말 : 축제 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

□ 사업변경 내역

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주선비문화축제

담당자

새마을관광과          전한구(☎639-6603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주 선비문화축제를 통하여 선비정신을 현대적 정신문화로 축제화

하여 대한민국을 대표하는 한류 정신문화축제로 육성

○ 양대 축제와 더불어 유불문화의 역사 관광자원을 통한 관광객 유치와

농특산물 홍보 및 판매행사를 통한 지역경제활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1 ∼ 12. 31

○ 위 치 : 순흥면 선비촌 일원

○ 규 모 : 영주 선비문화축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,660		540	560	560
국 비
시 도 비	160		40	60	60
시군구비	1,500		500	500	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 10 ∼ 2015. 12 : 기본계획 수립 및 예산편성

○ 2016. 01 ∼ 2016. 05 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외 등

○ 2016. 05. 06 ∼ 2016. 05. 10 : 영주 한국선비문화축제 개최

○ 2016. 06. 02 : 평가보고회

○ 2016. 07월말 : 축제 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주선비뮤지컬 정도전

담당자

새마을관광과          전한구(☎639-6603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유교정신문화의 창조적 계승과 유·무형의 유교문화를 활용한 관광 문화

산업 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1 ∼ 12. 31

○ 위 치 : 영주시 서천둔치 특설무대

○ 규 모 : 영주 선비 뮤지컬 정도전 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  344백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	544		344	100	100
국 비	240		240
시 도 비
시군구비	300		100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타	4		4

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 10 ∼ 2015. 12 : 기본계획 수립 및 예산편성

○ 2016. 01 ∼ 2016. 05 : 세부계획 수립, 홍보, 공연팀 섭외 등

○ 2016. 05. ∼ 2016. 08. : 영주 선비 뮤지컬 정도전 공연

○ 2016. 10월말 : 보조금 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

세계유교문화축전 지원

담당자

새마을관광과          전한구(☎639-6603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통 유교문화 유산을 지속가능한 관광자원으로 개발하여 유교문화를

통한 지역 관광산업 활성화 시키고,

○ 경북 북부지역을 세계적․현대적인 유교문화의 거점으로 육성하고 유교

문화를 매개로 한 미래지향적인 공동체를 형성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1 ∼ 12. 31

○ 위 치 : 영주시 일원

○ 규 모 : 세계유교문화축전 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	690		230	230	230
국 비
시 도 비
시군구비	690		230	230	230
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 10 ∼ 2015. 12 : 기본계획 수립 및 예산편성

○ 2016. 01 ∼ 2016. 02 : 세부계획 수립, 홍보, 공연팀 섭외 등

○ 2016. 03. ∼ 2016. 12. : 세계유교문화축전 개최

○ 2016. 12월말 : 보조금 정산

□ 향후계획

○ 계속 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

부석사 관광지 조성

담당자

새마을관광과 박찬민

(☎639-6613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부석사와 연계하여 기 개발지역을 중심으로 합리적인 조성계획을 수립하여 중부내륙권지역의 관광거점지역으로서 역할을 도모

○ 청정고부가 산업인 관광산업의 육성을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015 ∼ 2018

○ 위    치 : 부석면 북지리 일원

○ 주관단체 : 영주시

○ 사업규모 : 242,280㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,500백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,500	1,600	4,000	4,000	10,900
국 비	5,500	300	1,000	1,000	3,200
시 도 비	1,650	90	300	3,00	960
시군구비	13,350	1,210	2,700	2,700	6,740
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ 2015.  1.  : 부석사 관광지 조성사업(1차) 실시설계용역 착수 및 준공

○ 2015.  4.  : 부석사 관광지 조성사업(2차) 실시설계용역 착수

○ 2015.  6.  : 부석사 관광지 조성사업(1차) 보상 완료 및 공사 착공

○ 2015. 12.  : 부석사 관광지 조성사업(1차) 준공

○ 2016. 12.  : 부석사 관광지 조성사업(2차) 착공

○ 2017. 05.  : 부석사 관광지 조성사업(3차) 토지보상 실시

□ 향후계획

○ 2017. 10. : 부석사 관광지 조성사업(2차) 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장수발효 체험마을 조성사업

담당자

새마을관광과          박찬민(☎639-6613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역문화재자원의 활용 및 전통 발효문화가 발달한 지역 특성을 살려,

장류문화 체험시설 개발 및 콘텐츠 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ∼ 2020

○ 위 치 : 영주시 부석면 임곡리 일원

○ 규 모 : 49,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,700	-	-	460	7,240
국 비	3,100	-	-	230	2,870
시 도 비	930	-	-	69	861
시군구비	3,670	-	-	161	3,509
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 10. : 중기지방재정계획 반영, 투자심사(도) 완료

○ 2016. 12. : 기본설계용역 완료

○ 2017. 07. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2017. 11. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

죽계구곡 관광자원화사업

담당자

새마을관광과          박찬민(☎639-6613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소수서원 및 선비촌, 한국선비문화수련원의 선비체험과 지역의 뛰어난

관광자원인 자락길을 경유 초암사를 연계하는 합리적인 관광개발계획을

수립하여 관광거점 지역으로서 역할 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ∼ 2020

○ 위 치 : 영주시 순흥면 배점리, 내죽리 일원

○ 규 모 : L=7㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,500	-	-	200	3,300
국 비	1,750	-	-	100	1,650
시 도 비	525	-	-	30	495
시군구비	1,225	-	-	70	1,155
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 05. : 투자심사(시자체) 완료

○ 2016. 12. : 기본계획용역 완료

○ 2017. 07. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2017. 11. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주통합도서관 건립

담당자

선비인재양성과 차현숙(☎639-7733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 문화정보 취득, 최적의 독서환경 제공 및 평생교육 증진

○ 최신 도서관을 건립하여 지역 커뮤니티의 중심 역할을 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 경북 영주시 가흥동 1590-1번지

○ 규 모 : 부지 6,000㎡, 연면적 4,785㎡(지하 1, 지상 4)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,000	10,215	1,785
국 비	4,000	2,700	1,300
시 도 비	800	715	85
시군구비	5,200	4,800	400
지 방 채
민간자본
기 타	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013.  7. 29. : 통합(시립+도립) 신축 및 운영관리 합의각서 체결

○ 2014.  7. 30. : 중앙투융자 심사 승인(교육부)

○ 2014. 12. 17. : 부지 매입(경상북도교육청)

○ 2015.  6. 19. ~ 2016.  1.  4. : 설계용역

○ 2016.  5. 23. ~  6. 24. : 통합도서관 명칭 공모

○ 2016.  6. 28. : 착공

○ 2016.  8. 19. : 도서관 명칭 확정(영주선비도서관)

□ 향후계획

○ 2017.  8월 : 준공(영주교육지원청)

○ 2017. 10월 : 도서관 개관(영주교육지원청)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스포츠센터 실내수영장 건립

담당자

체육진흥과 김충영(☎639-3814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠센터 실내수영장을 통한 체육시설 인프라 확충으로 체육활동

인구 저변 확대와 건강한 사회를 조성하기 위함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년(5년간)

○ 위    치 : 영주시 가흥동 1972번지 일원(영주시민운동장 내)

○ 사업규모 : 건축면적 3,228㎡, 연면적 5,799㎡(지상2층, 지하1층)

○ 사업내용 : 수영장(25m x 8레인), 다목적체육관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,000	2,051	1,954	10,995	0
국 비	2,720	1,693	211	816	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	10,780	358	243	10,179	0
지 방 채	1,500	0	1,500	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

◦ 2014. 12월 : 부지매입 완료

◦ 2015. 12월 : 부지정비공사 완료

◦ 2016.  6월 : 공사 원가심사, 실시설계 완료

◦ 2016.  8월 : 사업자선정

◦ 2016.  9월 : 공사착공

□ 향후계획

◦ 2017.  6월 ~ 7월 : 위탁 공고 및 수탁자 선정

◦ 2017. 12월  : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 당 초

- 사 업 비 : 120억원

- 면    적 : 부지면적 : 7,400㎡, 연면적 : 6,000㎡

○ 현 재

- 사 업 비 : 150억원

- 면    적 : 부지면적 : 7,400㎡, 연면적 : 5,799㎡

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주댐수변 생활체육공원 조성

담당자

체육진흥과 배동직(☎639-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주댐 주변의 수변공간에 스포츠 및 레포츠 체험공간 조성 필요

○ 복합기능시설로 문화 및 체육발전을 견인하고 시민건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016 ~ 2019년

○ 위    치 : 영주시 이산면 신천리 일원(스포츠컴플렉스 부지 내)

○ 사업규모

∙ 부지규모 : 전체 327천㎡ 중 160천㎡(체육시설 75천㎡, 공원시설 85천㎡)

∙ 주요시설 : 축구장 1면, 야구장 1면, 풋살장 2면, 공원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	0	0	2,000	6,000
국 비	2,400	0	0	600	1,800
시 도 비	1,680	0	0	400	1,280
시군구비	3,920	0	0	1,000	2,920
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016.  3월 : 발전촉진형 지역개발계획수립 신청(영주시 → 경상북도 → 국토부)

○ 2016. 12월 : 발전촉진형 지역개발계획 승인(국토부, 2016.12.29.)

○ 2017.  7월 : 기본 및 실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2018.  6월 : 설계용역 완료

○ 2018.  8월 : 사업장 부지 공사 발주

○ 2019. 10월 : 체육시설 및 공원 조성사업 시행

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

하망동 곱작골 소방로로개설공사

담당자

도시과                권방민(☎639-6684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활기반 시설이 없어 주민생활 불편에 따른 도심공동화 진행

○ 화재 등 긴급사항 발생시 차량진입 불가로 주민생명·재산보호 위협

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년

○ 위 치 : 영주시 하망동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=200m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,600	700	400	400	2,100
국 비
시 도 비	200			200
시군구비	3,400	700	400	200	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 도로개설사업 실시설계용역 시행 : 2015. 06. 16.  ~ 11. 30.

○ 공사 편입토지 및 지장물 감정평가 시행 : 2015. 11. 06

○ 건축물 철거공사 및 도로개설공사 발주 : 2016. 12.

□ 향후계획

○ 도로공사 준공 : 2017.12.

○

□ 사업변경 내역(해당시)

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시재생(선도)사업

담당자

도시과 이홍승(☎639-6693)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주역, 영주시청 이전으로 경제적·물리적 쇠퇴로 장소성을 상실하여

舊영주역사를 중심으로 한 사업지 와 배후 주거지의 도시재생이 시급함.

○ 주거지와 상권이 혼재해 있는 구도심 근린상권 중심의 도시재생사업을

통해 소상인 경쟁력을 강화하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 영주시 영주1동, 영주2동 일원

○ 규 모 : 근대경관 조성,들꽃방송,게스트하우스,청년창업지원센터,지하 주차장

확장 및 환경개선사업,할머니묵공장운영,영주옛길 탐방로 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,114백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,114	5,344	5,976	8,794
국 비	10,057	4,335	2,515	3,207
시 도 비	1,527	442	713	372
시군구비	8,530	567	2,748	5,215
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2014.  5.  7 : 도시재생 선도지역 지정고시

○ 2014.  9. 25 : 도시재생 활성화계획 용역 착수

○ 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획 승인

○ 2015.  4. 21 : 영주시 도시재생지원센터 개소식

○ 2015. 4 ~ 2017. 12 : 용역발주 및 공사추진, 주민역량강화

□ 향후계획

○ 2017.  12. : 공사준공 및 시설물 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

하망지구 보행환경개선사업

담당자

도시과 권기혁(☎639-6695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통행빈도가 높은 하망지구를 보행환경개선사업을 추진하여 안전하고

편리한 보행환경 구축으로 시민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 영주시 하망동 일원

○ 규 모 : 보행환경개선 L=1.2km, 보도 · 교통안전시설물 등 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,900	2,900	1,000	-	-
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	1,900	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 시설공사 (토목, 전기, 폐기물) 완료

○ 지중화 공사 (한전, 통신, 케이블, 도시가스) 완료

□ 향후계획

○ 보행환경사업 구간내 불법주정차 계고 및 관리

○ 교통체계 안정화를 위한 교통안전 캠페인 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

석포리~지동리간 도로

(시도10호선) 확포장 공사

담당자

건설과  김대동(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로폭 협소 및 선형불량으로 차량 교행시 교통사고 위험이 높은 도로를       확.포장 하여 지역주민들에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2027

○ 위 치 : 영주시 이산면 석포리 ~ 지동리

○ 규 모 : 도로 확.포장 L=6.4km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,000	1,100	200	1,000	9,700
국 비
시 도 비
시군구비	12,000	1,100	200	1,000	9,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 2015.  4 : 1구간 실시설계 완료

○ 2015.  6 : 1구간 1차분 공사착공

○ 2016. 12 : 1구간 1차분 공사준공

○ 2017.  3 : 1구간 2차분 공사착공

□ 향후계획

○ 2017.  7 : 1구간 3차분 공사착공

○ 2019. 12 : 1구간 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

승평교 개체공사

담당자

건설과 김상환(☎639-6713)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문수면 월호리~승문리를 연결하는 기존교량의 노후 및 노폭 협소로 차량       교행이 불가하여 교통사고 위험이 높아 교량을 개체하여 주민들에게 교통       편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 영주시 문수면 월호리 ~ 승문리

○ 규 모 : 교량개체 L=169m, 접속도로 L=400m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	1,540	1,700	1,760
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	1,540	1,700	1,760
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2014. 12 : 실시설계 완료

○ 2015.  1 ~ 12 : 1차분 완료(교량하부공, 접속도로 및 호안공)

○ 2016.  6 ~ 12 : 빔제작 완료(16개소)

○ 2016.  12 : 2차분 착공

□ 향후계획

○ 2017.  12 : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

진우교(지방도935호) 개체공사

담당자

건설과 김대동(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 폭 협소 및 선형불량으로 교통사고 위험이 있어 도로 선형을 개량       하여 주민들에게 교통 편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 영주시 상망동(진우마을) 일원

○ 규 모 : 교량신설 L=24m, 연결도로 L=900m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,600	855	300	500	1,945
국 비
시 도 비	155	155
시군구비	3,445	700	300	500	1,945
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015. 10 : 실시설계 완료

○ 2016.  6 : 토지보상 협의 및 1차분 착공

○ 2017.  3 : 2차분 착공

□ 향후계획

○ 2019.  12 : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상석교 개체공사

담당자

건설과 신정교(☎639-6715)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부석면 상석리에 위치한 상석교는 노후로 인한 공용내하력 부족으로 붕괴       위험이있어 재난위험시설(D급)로 지정되었으며,

○ 이 교량을 이용하는 부석면 상석리는 본 교량외에 통행할 수 있는 우회       도로가없어 차량통행 제한으로 물류수송 및 영농에 불편이 가중되어 주민       불편 해소를 위해 조속한 시행이 절실한 상황임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 영주시 부석면 상석리 일원

○ 규 모 : 교량개체 L=47m, 접속도로 L=273m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,280	80	1,100	1,110
국 비
시 도 비	550			550
시군구비	1,730	80	1,100	550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2014. 10 : 실시설계 완료

○ 2016.  5 : 토지보상 협의 및 1차분 착공

○ 2017.  3 : 2차분 착공

□ 향후계획

○ 2018.  3 : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

여륵 ~ 파지도로 확포장 공사

담당자

건설과 신정교(☎639-6715)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 선형이 불량하고 노폭이 협소한 도로를 확.포장하여 농산물 수송의       원활로 지역경제 활성화 및 주민생활 편익제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019

○ 위 치 : 영주시 안정면 여륵리 ~ 장수면 파지리

○ 규 모 : 도로 확.포장 L=1.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300	400	100	200	1,600
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	2,100	200	100	200	1,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014.  9 : 실시설계 완료

○ 2014. 10 : 편입부지 감정 및 보상통보

□ 향후계획

○ 2017.  9 : 총괄 및 1차공사 착공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

초암사 진입도로 확포장 공사

담당자

건설과 김대동(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소백산 국립공원과 연결되는 초암사 진입도로의 노폭 협소로 차량 교행시       교통사고 위험이 상존하여 도로를 확.포장 하여 지역주민들과 관광객에게       교통편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 영주시 순흥면 배점리 일원

○ 규 모 : 도로 확.포장 L=1.6km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300	920	280	1,100
국 비
시 도 비	105	105
시군구비	2,195	815	280	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2013.  8 : 실시설계 완료

○ 2015.  9 : 토지보상 협의 및 1차분 착공

○ 2016.  7 : 2차분 착공

○ 2017.  5 : 3차분 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

평은~천본(군도8호선) 우회도로

개설공사

담당자

건설과 김대동(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시도8호선이 평은리 마을을 통과하고 도로폭 협소 및 차량통행량 증가로       교통사고 위험이 상존하여 우회도로로 지역주민들에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 영주시 평은면 평은리 ~ 천본리

○ 규 모 : 도로 확.포장 L=1.0km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	20	134	465	1,881
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	20	134	465	1,881
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 5 : 기본설계 완료

○ 2017. 8 : 실시설계 완료예정

□ 향후계획

○ 2017.  9 : 분할측량 및 편입부지 감정

○ 2017. 10 : 편입부지 보상통보

○ 2018.  3 : 공사착공

○ 2020.  6 : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주댐 평은리교 재가설공사

담당자

건설과 김대동(☎639-6714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영주댐에 수몰되는 평은리교 철거로 면사무소를 이용하는 주민 및 농민       들의 통행권이 상실됨에 따라 평은리교를 재가설 하여 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 영주시 평은면 평은리 일원

○ 규 모 : 교량 L=480m, 연결도로 L=63m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000			4,000	4,000
국 비
시 도 비				500
시군구비	3,000			1,000	1,500
지 방 채
민간자본
기 타	5,000			2,500	2,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2016. 12 : 실시설계 완료

○ 2017.  1 : 1차분 공사착공

□ 향후계획

○ 2018.  1 : 2차분 공사착공

○ 2018.  8 : 공사준공 및 영주시로 관리이관

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

월호교~와현지간 양수장설치공사

담당자

건설과 민규택(☎639-6733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 기상이변에 의한 잦은 가뭄발생으로 피해를 입고 있는 문수면 월호리,       와현 다락골, 동산골 지역(A=51.4ha)에 양수장 및 송수관로를 설치하여       서천용수를 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 문수면 월호리, 와현리

○ 규 모 : 양수장(1개소) 송수관로(13.7km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300		72	1,000	1,228
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		72	1,000	1,228
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 집수매거 L=158m 설치완료

○ 추진기기 가시설 설치

□ 향후계획

○ 양수장 설치

○ 송수관로 L=13km 설치

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장수 덕암~한정교간 도로개설공사

담당자

건설과 강신혁(☎639-6723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장수면 반구리~문정동을 연결하는 마을간 연결도로를 개설하여 농산물

수송원활과 지역균형 발전에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018

○ 위 치 : 영주시 장수면 반구리(덕암) ~ 한정교 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,350	1,075	250	800	1,225
국 비
시 도 비	3,350	1,075	250	800	1,225
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 편입토지 및 지장물 보상금 지급 완료

○ 토공 및 구조물공 설치 완료

□ 향후계획

○ 보조기층 포설 및 다짐

○ 아스콘 포장 및 공사 마무리

□ 사업변경 내역 : 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

죽계천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과      배승철(☎639-6805)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 오염원이 위치한 죽계천을 대상으로 수생태 및 생물서식처를 조성       하여, 안전한 상수원수 확보 및 시민 편익시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ∼ 2017

○ 위 치 : 죽계천(순흥면 ∼ 안정면)

○ 규 모 : 3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000	2,386	661	3,953
국 비	4,200	1,434	246	2,520
시 도 비	1,050	357	212.55	480.45
시군구비	1,750	595	352.5	802.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○ 2015.01.09 : 보상계획 및 열람공고 게시

○ 2016.01 : 편입토지 보상

○ 2016.01.05 : 2차분착공

○ 2016.05.14 : 1차분 공사 준공(계약)

○ 2016년 05월 30일 : 공사(1차분) 준공

◯ 2016년 07월 19일 : 공사(2차분) 준공

◯ 2016년 11월 11일 : 공사(3차분) 착공

□ 향후계획

○ 2018.10.22 : 토지보상 지급 및 공사 추진 및 준공

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

체류형 농업창업지원센터 건립

담당자

농정과수과 오원일(☎639-7322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예비 귀농인을 대상으로 일정기간 가족과 함께 체류하면서 농촌이해, 농촌적응,

농업 창업과정 실습 및 교육을 체험할 수 있는 One-Stop지원센터를

건립·운영하여 귀농인의 안정적인 정착 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2016년(공사기간 : 2015. 1. 5 ~ 2016. 4. 30)

○ 위 치 : 영주시 창진로 299-31번지 일원

○ 규 모 : 소백산 귀농드림타운 조성 29,900㎡

(교육관, 체류형 주택 30세대, 공동하우스 3동, 농기계보관창고 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	5,030	2,970
국 비	4,000	2,027	1,973
시 도 비	1,200	608	592
시군구비	2,800	2,395	405
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 12. 30 : 공사 계약(건축, 정보통신, 전기, 소방, 감리)

○ 2016. 04. 30 : 공사 준공

○ 2016. 06. 10 : 소백산 귀농드림타운 개관

○ 2016년 과정 : 귀농3개월 1,2기 운영  1기 22세대, 2기 18세대

- 귀촌과정 : 삼성SDI, KT, 쌍용 등 9회실시(2박3일)

○ 2017년 과정 : 2017년 과정 입교식(3월7일 ~ 장기 10개월과정)

- 원룸 18세대, 투룸12세대 : 100% 입교(교육 운영 중)

□ 향후계획

○ 소백산 귀농드림타운 시설 보완

- 편의시설 : 입주민 체력단련 및 복지시설

- 시설보완 : ICT(스마트팜)융복합사업

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 ~ 당초 : 2013~2014, 현재 : 2013~2016

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

인삼 생산유통시설 현대화사업

담당자

축산특작과         우병준(☎639-7356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리지역 특화 작물인 인삼을 이용한 명품 특산품으로 육성

○ 소비자의 다양한 수요에 대응하고, 차별화된 건강기능성 신제품 제조 기술개발을 통한 국내 및 해외시장 개척으로 농가소득 증대에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017년

○ 위 치 : 영주시 봉현면 대촌리 410-3번지

○ 규 모 : 건축 연면적1,277.25㎡ / 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,100			2,100
국 비	630			630
시 도 비	258			258
시군구비	602			602
지 방 채
민간자본	610			610
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 입찰 및 시공업체 선정 : 2017. 2. 20

○ 착공 : 2017. 3월

○ 현재 건축 및 기계장비 설치중

□ 향후계획

○ 공장내부 GMP시설 및 신재품 개발

○ 2017. 9월 준공예정

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

우량송아지 생산 및 비육시설사업

담당자

축산특작과

김근영(☎639-7347)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송아지 생산단지 및 사육시설 지원을 통해 우수 형질의 송아지를 생산 공급

○ 수정란 이식을 통한 우량송아지 대량생산기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017

○ 위 치 : 영주시 부석면 감곡리 721-1

○ 규 모 : 5동 6,900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000			2,000
국 비	400			400
시 도 비	120			120
시군구비	280			280
지 방 채	0			0
민간자본	1,200			1,200
기 타	0			0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 건축인허가 완료 : 2015. 4.  3.

○ 농림축산식품부 사업대상자 선정 : 2015. 5. 14.

○ 토목공사 착공 : 2016. 7. 11.

○ 건축공사 착공 : 2017. 6. 30.

□ 향후계획

○ 건축공사 완료(사업완료) : 2017. 10월말

○ 가축입식 : 2017. 11월

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다목적 농업인 교육관 건립

담당자

농촌지도과         김병각(☎639-7362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인의 다양한 교육수요를 충족시킬 수 있는 다목적 농업인 교육 시설 건립

○ 농업기관 확대에 따른 사무 및 농업인 상담 활용 공간 부족해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ～ 2017

○ 위 치 : 농업기술센터 내(안정면 안정로 30)

○ 규 모 : 1,142.4㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	102	2,898
국 비	1,500	51	1,449
시 도 비
시군구비	1,500	51	1,449
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  3월 다목적 농업인 교육관 착공

○ 2016. 10월 전산장비 등 교육장비 발주

○ 2016. 12월 교육관 준공 및 개관식

□ 향후계획

○ 다목적 농업인 교육관 4개 교육시설 활용 농업인 교육 활성화

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상망지구 하수관거정비

담당자

환경사업소

김명준(☎639-7277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장의 저농도·용량초과의 문제점 해결 및 방류하천의 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 상망동일원

○ 규 모 : 오수관로 L=8.5km, 배수설비 322개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,513	3,252	3,261	-	-
국 비	4,559	2,784	1,775	-	-
시 도 비
시군구비	1,954	468	1,486	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 4차분 착공(2016. 3.)

○ 2차분 준공(2016. 6.), 3차분 준공(2016. 8.)

□ 향후계획

○ 4차분 준공(2017. 3.)

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 오수관로 L=7.358km

○ 변경 : 오수관로 L=8.543km

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

적동농어촌마을 하수도설치

담당자

환경사업소

김명준(☎639-7277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거환경개선 및 방류수역의 수질오염 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 문수면 적동리 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=2.3,km, 하수처리장 50㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,307백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,307	1,130	2,177	-	-
국 비	2,315	815	1,500	-	-
시 도 비	208	121	87	-	-
시군구비	784	194	590	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 3차분 착공(2016. 3.)

○ 1차분 준공(2016. 6.), 2차분 준공(2016. 10.)

□ 향후계획

○ 3차분 준공(2017. 4.)

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

2016년도 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영주시주변 하수관거 정비

담당자

환경사업소

최재훈(☎639-7278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 1,2단계 BTL사업에서 제외된 영주시 주변의 하수관로를 정비하여       저농도·용량초과 문제점 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 영주동, 가흥동, 창진동 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=5.6km, 배수설비 289개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,082백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,082	225	3,010	721	1,126
국 비	3,557	158	2,106	505	788
시 도 비
시군구비	1,525	67	904	216	338
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 한정마,관사골지구 착공(2016. 6.)

○ 필두지구 준공(2016. 6.)

○ 서늘기지구 준공(2016. 12.)

○ 서릿골지구 착공(2016. 12.)

□ 향후계획

○ 창진지구 착공(2017. 4.)

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음